제주도 전역 지하수 종합조사 기획연구 용역 결과

Ⅰ		제주도 전역 지하수 종합조사 기획연구 용역 개요

○ 건    명 : 제주도 전역 지하수 종합조사 기획연구 용역

○ 업 체 명 : 한국건설기술연구원(정부출연연구기관)

○ 계약금액 : 일금 오천만원 정(\50,000,000)

○ 용역기간 : 2019. 2. 28. ~ 8. 30.

Ⅱ		제주도 전역 지하수 종합조사 기획연구 용역 결과

1. 제주지하수 현안분석

□ 제주지하수 수량과 수질 관련 6개 주요 이슈도출

- 지하수위 하강, 지하수 과다개발, 지하수 취수량 증가, 용출량 감소, 수질오염, 해수침투

2. 전문가 의견수렴 결과(전문가․道물정책과․道의회․도내 환경단체 총 37명)

□ 제주지하수 현상황에 대한 인식 : 위기상황으로 인식(39%), 보통(30%)

□ 제주도 전역 지하수 종합조사 필요성 : 매우 필요(92%)가 지배적

□ 제주개발공사의 조사․연구 수행범위 : 표선유역(42%), 도 전역(37%)

3. 조사사업 시행주체

□ 도 전역 종합조사 : 제주특별자치도

□ 표선유역 조사 : 제주특별자치도개발공사

4. 추진과제

□ 도 전역 종합조사 : 수량부문 9개 과제, 수질부문 11개 과제, 수문지질부문 4개 과제 총 24개 과제

□ 표선유역 조사 : 지하수영향조사 8개 과제, 삼다수 취수원 보전․관리 6개 과제 총 14개 과제

□ 물수지 분석 및 지속이용가능량 평가

- 삼다수 지하수 영향조사에 표선유역을 실시토록 조례로 규정

→ 유역단위로 조사‧분석‧평가가 곤란하므로 도 전역 일괄 시행이 필요함

5. 조사 기간

□ 도 전역/표선유역 조사 → Ⅰ,Ⅱ단계 각 5년씩 10년간 수행

6. 참여 조사기관 검토

□ 도 전역 종합조사 : 국내 지하수조사전문기관(4개 기관) + 해외연구기관

□ 표선유역 조사 : 국내 지하수조사전문기관(4개 기관) + 해외연구기관

7. 예상사업비

□ 도 전역 종합조사 : 100억원(Ⅰ단계 58억원, Ⅱ단계 42억원)

□ 표선유역 조사 : 50억원(Ⅰ단계 30억원, Ⅱ단계 20억원)

구분	도 전역 조사	표선유역 조사	비 고
추진 기간	2단계 10년간 - 1단계 : 2020 – 2025 - 2단계 : 2026 – 2030	2단계 10년간 - 1단계 : 2019. 11 - 2024. 10 - 2단계 : 2025 - 2030
사업비	총 100억원 - 1단계 : 58억원 - 2단계 : 42억원	총 50억원 - 1단계 : 30억원 - 2단계 : 20억원	시추조사, 현장 측정, 시설 등 시설비용 제외
	[부문별 조사비] - 수량부문 : 23억원 - 수질부문 : 41억원 - 수문지질 : 36억원	[부문별 조사비] - 지하수영향조사 : 30억원 - 취수원 보전․관리 : 20억원

8. 사업타당성 분석

□ 경제적․기술적․정책적으로 타당한 조사사업으로 분석됨

- 도 전역 종합조사 : B/C(비용편익비) 4.3, NPV(순현가) 24,747백만원

- 표선유역 조사 : B/C(비용편익비) 13.0, NPV(순현가) 30,313백만원

Ⅲ		기대효과

○ 제주도 지하수 조사·연구에 대한 기초자료로 활용

□ 제주개발공사의 지하수 조사⋅연구 역할 정립

- 道(제주지하수연구센터)와 중첩되는 연구과제는 배제하고 자체 및 위탁연구로 시행